ꊴ 특수공시

❒ 광복로일원 시범가로 조성사업

❍ 대 상 지

▷ 광 복 로 : L=750m, B=15m(광복로 입구~창선상가)

▷ PIFF광장 : L=240m, B=15m(PIFF존 쇼핑몰~창선상가)

PIFF광장

광복로

□ 사업기간 : 2005 . 1월 ~ 2007. 6월

□ 사업내용 : 간판, 가로시설물 등 토탈 디자인 개념 종합 개선

□ 추진주체 : 문화관광부, 부산광역시, 중구청

□ 총사업비 : 8,667백만원(국비 3,000, 시비 2,834, 구비 2,833)

□ 추진실적

▷ 국제공모 ․ 2차 현상공모 실시, 최종 당선작 주민투표 선정

▷ 실시설계 및 컨설팅 용역추진(2006. 1. 9 ~ 7. 31)

▷ 용역추진 보고회 개최(5회)

구 분	(%)	1~3월	4~6월	7~9월		10~12월	07. 1~3월	4~6월
컨설팅	20	2	3	3		4	4	4
가로및가로 시설물	30	13	13	4
간판및건축물 파사드	50	21	21	8
계	100	36	37	15		4	4	4
< 실시설계 및 컨설팅 용역공정표 >

□ 향후 추진일정

구분	8월	9월	10월~	12월	’07.6월	하반기
간판 분야	용역성과품 일상감사 의뢰(시 감사관실) 시범사업 마무리	시공업자 선정 및 착공	시공	준공	준공	-
가로 분야	용역성과품 일상감사 의뢰(시 감사관실) 발주계획 수립			시공	준공 (1단계)	준공 (2단계)

□ 사업효과

▷ 간판 및 가로등, 보도, 가로수 등 거리의 공공시설물을 토탈      디자인 개념에 입각하여 세계적인 수준의 문화예술 명물거리 조성

▷ 문화관광 진흥 및 지역경제 활성화 도모

❒ 『중구 웰빙체육관 건립』공사

□ 사업목적 :  고지대 주거밀집지역에 주민 편의 시설이 전무하여                      다목적용『웰빙체육관』을 건립, 구민에게 여가선용                      및 체력증진의 장을 마련하고 열악한 주거환경 개선으로

주민의 삶의 질 향상과 도시균형발전에 기여

□ 위    치 : 부산광역시 중구 영주동71-6번지

□ 사업기간 : 2005 .9월～ 2007. 2월

□ 규    모 : 부지 400.5평, 건물 520.2평 ▷지하1층, 지상4층

□ 총사업비 : 39억원(국비 30.8%, 지방비 69.2%)

□ 추진상황 : ’05. 9월-12월 설계용역 및 공사계약 ⇨ ’07년 2월 준공예정

□ 추진실적 : ‘05. 12월말 현재 공사계약

(단위 : 백만원)

구 분	추 진 실 적			비 고
	계	‘05.10	‘05. 12. 30
사업내용		부지매입 및설계용역	공사계약
사 업 비	1,128	588	540

□ 사업효과

▷ 고지대 주거밀집지역에 거주하는 주민들의 건전한 여가선용과

삶의 질 향상

▷ 열악한 주거환경 개선으로 도시균형 발전 기여

❒ 『중구 노인복지회관』건립

❍ 사업목적 : 고령화 사회의 노인복지 수요와 욕구에 부응하기 위하여

다양한 복지프로그램의 시행이 가능한 규모와 기능을 갖춘

노인복지회관 건립

❍ 위    치 : 부산시 중구 보수동 1가 113외 2필지

❍ 사업기간 : 2004 ∼ 2006

❍ 규    모 : 지하1․지상5층, 연면적 1,587.49㎡, RC조

❍ 총사업비 : 4,071백만원(국비 1,200백만원, 시비 1,619백만원, 구비 1,252백만원)

❍ 추진상황 : ’05. 10월 공사착공  ⇒  ’06년 9월 27일 개관

❍ 추진실적 : ’05. 12월 공정 10%

(단위 : 백만원)

구분	추진실적				비고
공정율(%)	계	2004	2005	2006
공사내용		설계,보상	착공,건축공사	마감공사,준공
사업비	4,071	1,408	2,515	148

❍ 사업효과

▷ 고령화 사회의 노인층을 위한 다양한 복지욕구 충족

▷ 노인여가, 문화공간 확보를 통한 노인복지 향상 기여

❒ 『중구 환경자원관리소』신축

□ 사업목적 :  환경자원관리소의 신축으로 자원절약과 재활용률을

높이고 처리능력을 향상시켜 쓰레기발생량을 최소화하여,

재활용품 수집․운반․선별․처리의 안정적 운영도모

□ 위    치 : 부산광역시 사하구 장림동 935, 932번지

□ 사업기간 : 2005 .3월~ 2006. 8월

□ 규    모 : 459평/1호동(선별장,지상2층)

/2호동(사무및편의시설,지상3층)/3호동(경비실)

□ 총사업비 : 1,071백만원(국비321, 시비429, 구비321)

□ 추진상황 : ’05. 9월-12월 설계용역  ⇨ ’06년 8월 29일 준공

□ 추진실적 : ‘05. 12월말 현재 건축승인(사하구청)

□ 사업효과

▷ 재활용 기반시설 구축으로 생활폐기물 감량도모

▷ 재활용선별의 자동화에 따른 처리능력 향상으로 폐기물의 자원화

확대

❒ 『재래시장 시설 ․ 경영현대화』

❍ 사업목적

대형유통점, 온라인 쇼핑몰 등 유통채널의 다양화와 소비자들의

구매패턴의 변화에 비해 주차장 등 편의시설 미비 등으로 경쟁력을 상실하고 있는 지역경제의 중요 근간인 재래시장 상권 활성화를

위해 재래시장의 시설 및 경영현대화지원 필요

❍ 사업개요

▷ 기  간 : 2001년∼2014년

▷ 기 투자 및 추진사업 - 10,243백만원(국비 5,482, 시비 2,587, 구자비 2,174)

- 국 제 시 장(4,755) : 아케이드 및 외․내부 리모델링 등

- 창 선 상 가(2,083) : 아케이드 설치, 건물외벽 리모델링 등

- 부 평 시 장(1,370) : 진입로 특화포장

- 자갈치시장 (921) : 냉동․냉장창고 및 상징탑

- 대 덕 시 장 (875) : 진입로 특화포장

- 기타 6개시장(239) : 소방설비 및 화장실 보수 등

❍ 추진계획

▷ 시장별 사업현황 취합

▷ 사업타당성 및 상인자구노력 등 시장별 경쟁력 평가

- 사업 내용의 타당성 및 시급성, 자부담 확보

- 상인자구의지 (상인교육, 가격표시제) 등

▷경쟁력 평가에 따른 순위별 현대화 지원 추천 : 매년 2~3개 시장

▷지원 추천 예정 사업 : 15개시장 7,500백만원

❍ 사업효과

▷재래시장 시설 환경개선 및 경영현대화로 대형유통점 및 온라인          쇼핑몰 등에 대한 경쟁력 확보

▷ 경쟁력 확보를 통한 고객유인으로 지역경제 활성화