109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 중구에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
동광동주민센터 건립공사	2,440.5	-	315.5	100	2,025	2021	2019	12.9
대청동 공용목욕탕 조성	3,120.5	-	989	2,131.5	-	2020	2019	31.7
새뜰마을사업	3,704	-	128	2,233	1,343	2022	2019	10
영도대교지구 연안정비사업	4,919	87	31	1,585	3,216	2021	2017	30
중구복합건강센터 건립	6,000	1,050	1,524	3,426	-	2020	2017	43

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동광동 주민센터 건립공사

담당자

행정지원과 이영희(☎600-4124)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 주민센터 건물의 노후화 및 40계단문화관과의 공간 공유로 사용면적 협소

- 이용자 중심의 공간 배치로 쾌적한 업무환경 조성 및 양질의 행정서비스 제공

○ 전용동사 건립에 대한 지역주민들의 지속 건의

- 지역주민 숙원사업 해결 및 커뮤니티 공간 등 제공으로 주민자치 기반 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 4월 ~ 2021년 12월

○ 위 치 : 동광동5가 3-80 외 1필지 383.7㎡

○ 규 모 : 건립면적 180㎡, 연면적 730㎡, 지상 5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,440.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,440.5		315.5	100	2,025
국 비
시 도 비
시군구비	2,440.5		315.5	100	2,025
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12.9%)

○ 2019. 4월 : 동광동 주민센터 건립 기본계획 수립, 2019년 제2회 추경확보

○ 2019. 5월~6월 : 2019. 제3회 공유재산심의, 공유재산관리계획 승인(원안가결)

○ 2019. 7월 : 토지감정평가, 매매계약 체결 및 소유권 이전등기, 지적측량 실시

○ 2019.10월 : 지방재정투자심사 재심의(공사기간 3년 경과)

□ 향후계획

○ 2020. 4월 : 공공건축 기획심의

○ 2020. 6월~11월 : 기본 및 실시설계 용역

○ 2020. 12월~2021. 1월 : 경관심의, 건축허가, BF예비인증 등 행정절차

○ 2021. 2월 : 공사착공

사업명

대청동 공용목욕탕 조성

담당자

복지정책과 조영임(☎600-4314)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대청동 소재 공중목욕탕 부재로 고지대 주민의 목욕시설 이용 불편 및

설치요구가 확대됨에 따라 구립 복지 목욕시설을 조성․운영하여 지역

주민의 다양한 수요 충족 및 복지증진 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 3월 ∼ 2020년 12월

○ 위    치 : 중구로 111번길 6(대청동4가 24-1, 舊.수정탕)

○ 사업내용 : 부지매입 및 공용목욕탕 조성 ▷ 신축공사 추진

○ 주요시설 : 공용목욕탕, 다목적사무실, 기계실 등

○ 사업규모 : 지하1층/지상5층, 대지면적 299.6㎡, 연면적 823.99㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,120.5백만원(매입비 910, 시설비 등 2,210.5)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,120.5	-	989	2,131.5	-
국 비	-	-	-		-
시 도 비	-	-	-		-
시군구비	2,120.5	-	14	2106.5	-
지 방 채	-	-	-		-
민간자본	-	-	-		-
기 타	1,000	-	975	25	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 31.7%)

○ 2019. 3월 건립 기본계획 및 부지 매입계획 수립

○ 2019. 5월 중기재정계획 변경(안) 심사, 지방재정 투자 자체심사

○ 2019. 7월 부지 매매계약 체결(909,700천원) 및 소유권 이전등기,

부산시 특별조정교부금 10억원 교부결정 통보(2019.7.4.)

○ 2019.10월 대청동 행복복지목욕탕(가칭) 운영·관리계획 및 조성 세부추진 계획 수립

○ 2019.12월 기본 및 실시설계 용역 착수(12.24)

□ 향후계획

○ 2020. 1~2월 기존건축물 석면조사용역, 철거공사・폐기물처리용역 발주

○ 2020. 3~4월 철거공사․폐기물 처리용역

○ 2020.   7월 기본 및 실시설계용역 준공, 건립공사 공개경쟁입찰 공고,

낙찰자 선정 및 계약체결

○ 2020. 8~12월 건립공사 추진

○ 2021.   1월 개장 및 운영

사업명

새뜰마을사업

담당자

재생건축과 장희호(☎600-4494)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장을 위해 안전·위생 등 생활    인프라 확충 및 주거환경 개선 등 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2022

○ 위 치 : 동광동 5가 일원(7‧10‧11‧12‧13통) ▷ 31,776㎡

○ 내 용

- 안전확보 : 난간설치, 노면‧계단 설치 및 정비, 사면보강, 소화전 설치 등

- 생활위생인프라 : 커뮤니티시설 조성, 마을공방‧마당 설치, 도시가스배관 설치 등

- 주택정비 : 빈집철거, 슬레이트 지붕개방, 집수리 사업

- 휴먼케어 및 주민역량강화사업 : 공동체 프로그램, 주민대학 등 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,704백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,704	0	128	2,233	1,343
국 비	2,593	0	128	1,525	940
시 도 비	333	0	0	212	121
시군구비	778	0	0	496	282
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10 %)

○ 2019.  7월  2019 취약지역 생활여건 개조사업 기본 추진계획 수립

○ 2019. 10월  새뜰마을사업 마스터플랜 수립 용역 발주

○ 2019. 11월 새뜰마을사업 마스터플랜 수립 용역 착수

○ 2019. 12월  안전확보 사업 실시설계 용역 준공

□ 향후계획

○ 2020.  7월 안전확보 사업 공사시행

○ 2020.  7월 국토부 마스터플랜 승인 및 세부사업 시행

사업명

영도대교지구 연안정비사업

담당자

건설과 박종인(☎600-4732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영도대교 도개기능 복원에 따라 증가하는 관람객을 위한 전망 등 편의시설 확충으로 관광자원화 도모 및 주변 원도심 경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 11. ~ 2021. 1.

○ 위 치 : 용미길9번길 6-33 전면 해상

○ 규 모 : 연안정비 A=1,540㎡ (잔교, 등대 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,919백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,919	87	31	1,585	3,297
국 비	2,500	44	31	793	1,632
시 도 비	2,419	43	-	792	1,584
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2013.12.: 영도대교일원 연안정비사업 타당성 및 기본계획수립용역 완료

○ 2014. 9.: 제2차 연안정비(변경) 기본계획 반영(해양수산부)

○ 2017. 2.: 부산광역시 제1차 투자사업 심사 완료(조건부 가결)

○ 2018.11.: 실시설계용역 착수, 착수보고회 개최

○ 2020. 3.: 실시설계용역 준공

○ 2020. 4.: 계약심사 완료 및 공사발주

○ 2020. 5.: 공사착공 및 주민설명회 개최

□ 향후계획

○ 2020. 7.: 파사드 설치 용역 착수

○ 2021. 1.: 공사 및 용역 준공

사업명

중구 복합건강센터 건립

담당자

보건과 김미향(☎600-4766)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건강지수가 낮은 중구민의 만성질환 예방 및 건강한 생활습관 형성을 지원하고,

치매예방 및 조기검진, 취약계층 건강관리 서비스 제공 등 구민의 건강증진에

기여할 공공보건 인프라시설 신축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2020년

○ 위 치 : 부산 중구 흑교로 48

○ 규 모 : 지하1층 ~ 지상8층, 연면적 1,695.14㎡, 건폐율 76.06%, 용적율 455.70%

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,000	1,050	1,524	3,426	-
국 비	1,259	919	340	0	-
시 도 비	872	1	271	600	-
시군구비	2,519	81	212	2,226	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,350	49	701	600	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  43 %)

○ 2017.  7월  복합건강센터 신축 기본계획(안) 수립

○ 2018.  1월  복합건강센터 세부 신축계획 수립

○ 2018.  3월  일반설계공모 공고

○ 2018.  7월  기본설계안 심의 완료

○ 2018. 12월  신축공사 입찰 및 계약, 공사착공

○ 2019. 10월  실내건축공사 설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 6월 복합건강센터 건립 관련 주요 공사 준공

○ 2020. 7월 복합건강센터 운영

10-2. 지방채 발행사업: 우리 구 해당사항 없습니다.

10-3. 민간투자사업 : 우리 구 해당사항 없습니다.