109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 중구에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
대청동 공용목욕탕 조성	3,500	989	584	1,927	0	2021	2019	45%
광복로 일원 특화거리정비	2,020	0	19	700	1,300	2022	2020	20%
영도대교지구 연안정비사업	5,000	118	1,878	2,704	0	2021	2017	100%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

대청동 공용목욕탕 조성사업

담당자

복지정책과 조영임(☎600-4312)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대청동 소재 공중목욕탕 부재로 고지대 주민의 목욕시설 이용 불편

및 설치 요구 확대

○ 구립 공용목욕탕을 조성․운영하여 지역주민의 복지증진 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 3월~ 2021년 12월

○ 위 치 : 중구 대청동4가 24-1(舊.수정탕)

○ 규 모 : 지하1층/지상3층, 대지면적 299.6㎡, 연면적 599.06㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,500	989	584	1927	0
국 비
시 도 비
시군구비	2,500	14	559	1,927	0
지 방 채
민간자본
기 타	1,000	975	25	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 2019. 3월 : 건립 기본계획 및 부지 매입계획 수립

○ 2019. 7월 : 부지 매매계약 체결(909,700천원) 및 소유권 이전등기

○ 2019. 8월~10월 : 건축물 구조안전진단 용역 추진 ▷ 안전종합 D등급 판정

※ 조성방안 변경 : 리모델링 공사 ⇒ 신축 공사

○ 2019.11월~12월 : 기본 및 실시설계 용역 계약체결 및 용역착수(12.24)

○ 2020. 3월 : 장애물없는 생활환경(BF) 예비인증 신청, 경관위원회 심의

○ 2020. 4월 : 기존건축물 철거공사 및 건설폐기물 처리용역 준공(3.16~4.24)

○ 2020. 7월 : 장애물없는 생활환경(BF) 예비인증 심의완료(7.16)

○ 2020. 9월 : 공사비 증가에 따른 시설규모 축소 결정(9. 7)

○ 2020.10월 : 추가사업비 예산 확보, 경관위원회 변경심의

○ 2020.11월 : 수지분석 연구용역 착수

○ 2020.12월 : 기본 및 실시설계용역 준공(12. 7), 건립공사 계약(12.23)

□ 향후계획

○ 2021. 1월 : 건립공사 착공

○ 2021. 2월 : 수지분석 연구용역 준공

○ 2021. 6월 : 주민설명회 개최

○ 2021. 7월 : 대청 행복복지탕 운영·관리 계획 수립

○ 2021. 8월~10월 : BF본인증 심사, 건립공사 준공

○ 2021. 9월~10월 : 조례안 및 민간위탁 동의안 구의회 상정

○ 2021.11월~12월 : 민간위탁 절차 및 목욕장업 허가 절차 이행,

운영용품 구입·비치, 목욕탕 시운전 등

○ 2021.12월말 : 목욕탕 개장

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재
총사업비	2,810백만원	3,500백만원
사업규모	지하1층/지상5층, 대지면적 299.6㎡, 연면적 762.66㎡	지하1층/지상3층, 대지면적 299.6㎡, 연면적 599.06㎡
사업기간	2019년 3월 ～ 2019년 12월	2019년 3월 ～ 2021년 12월
조성방안	기존건축물 리모델링	신축공사

사업명

광복로 일원 특화거리 정비

담당자

건설과 한충훈(☎ 600-4732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2008년 ｢광복로 일원 시범가로 조성사업｣ 준고 이후 매년 파손구간을 부분적으로 정비하고 있는 실정으로 안전사고예방 및 주민불편사항 해소를 위하여 광복로 일원의 전반적인 도로 재정비 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 5. ~ 2022. 6.

○ 위 치 : 광복로 일원(남포역7번출구 ~ SC제일은행)

○ 규 모 : 도로정비 L= 740m, B= 3.6~6.2m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,020백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,019	-	19	700	1,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,019	-	19	700	1,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020. 5.: 사업계획 수립 및 방침 결정

○ 2020. 5.: 실시설계용역 착수

○ 2020. 7.: 주민의견 수렴을 위한 설명회 개최

○ 2020. 9.: 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2021. 1.: 부산市 특별교부금(1,000백만원) 확보

○ 2021. 9.: 공사 착공

○ 2022. 6.: 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간: (당 초) 2020.5. ~ 2021. 11.  (변경) 2020. 5. ~ 2022. 6.

○ 총사업비: (당 초) 2,000백만원         (변경) 2,020백만원

사업명

영도대교지구 연안정비사업

담당자

건설과 한충훈(☎600-4732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영도대교 도개기능 복원에 따라 증가하는 관람객을 위한 전망 등 편의시설 확충으로 관광자원화 도모 및 주변 원도심 경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 11. ~ 2021. 4.

○ 위 치 : 용미길9번길 6-33 전면 해상

○ 규 모 : 연안정비 A=1,540㎡ (잔교, 등대 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,700	118	1,878	2,704	-
국 비	2,347	75	1,787	485	-
시 도 비	2,353	43	91	2,219	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013.12.: 영도대교일원 연안정비사업 타당성 및 기본계획수립용역 완료

○ 2014. 9.: 제2차 연안정비(변경) 기본계획 반영(해양수산부)

○ 2017. 2.: 부산광역시 제1차 투자사업 심사 완료(조건부 가결)

○ 2018.11.: 실시설계용역 착수, 착수보고회 개최

○ 2020. 3.: 실시설계용역 준공

○ 2020. 4.: 계약심사 완료 및 공사발주

○ 2020. 5.: 공사착공 및 주민설명회 개최

○ 2020. 5.: 파사드 설치용역 발주

□ 향후계획

○ 2021. 4.: 파사드 설치용역 준공

○ 2021. 4.: 영도대교지구 연안정비사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

10-2. 지방채 발행사업 : 우리 구는 해당사항 없습니다.

10-3. 민간투자사업 : 우리 구는 해당사항 없습니다.