109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 중구에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
대청동 공용목욕탕 조성사업	3,500	1,573	1,829	0	0	2021	2019	100%
광복로 일원 특화거리정비	2,020	19	299	1702	0	2022	2020	90%
동광길도로 (소로2-4호선) 확장	3,150	2,800	350	-	-	2021	2018	100%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2021년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘21년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

대청동 공용목욕탕 조성사업

담당자

복지정책과 황정희(☎600-4312)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대청동 소재 공중목욕탕 부재로 고지대 주민의 목욕시설 이용 불편에 따른

설치 요구 확대

○ 구립 공용목욕탕을 조성․운영하여 지역주민의 복지증진 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 3월~ 2021년 12월

○ 위 치 : 중구 대청동4가 24-1(舊.수정탕)

○ 규 모 : 지하1층/지상4층, 대지면적 299.6㎡, 연면적 599.06㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,500	989	584	1,829	0
국 비
시 도 비
시군구비	2,500	14	559	1,829	0
지 방 채
민간자본
기 타	1,000	975	25	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 완료 100 %)

○ 2019. 3월 : 건립 기본계획 및 부지 매입계획 수립

○ 2019. 7월 : 부지 매매계약 체결(909,700천원) 및 소유권 이전등기

○ 2019. 8월~10월 : 건축물 구조안전진단 용역 추진 ▷ 안전종합 D등급 판정

※ 조성방안 변경 : 리모델링 공사 ⇒ 신축 공사

○ 2019.11월~12월 : 기본 및 실시설계 용역 계약체결 및 용역착수(12.24)

○ 2020. 3월 : 장애물없는 생활환경(BF) 예비인증 신청, 경관위원회 심의

○ 2020. 4월 : 기존건축물 철거공사 및 건설폐기물 처리용역 준공(3.16~4.24)

○ 2020. 7월 : 장애물없는 생활환경(BF) 예비인증 심의완료(7.16)

○ 2020. 9월 : 공사비 증가에 따른 시설규모 축소 결정(9. 7)

○ 2020.10월 : 추가사업비 예산 확보, 경관위원회 변경심의

○ 2020.11월 : 수지분석 연구용역 착수

○ 2020.12월 : 기본 및 실시설계용역 준공, 건립공사 시행계획 수립․발주․착수

○ 2021. 1월 : 운영관련 주민설문조사 실시

○ 2021. 2월 : 수지분석 연구용역 준공

○ 2021. 4월 : 설계변경(건축 1차, 기계 1차)

○ 2021. 5월 : 장애물없는 생활환경(BF) 본인증 용역 추진 계획 수립․착수

○ 2021. 6월 : 수지분석 연구용역 결과 주민설명회 개최

○ 2021. 7월 : 장애물없는 생활환경(BF) 본인증 신청

○ 2021. 8월 : 상수도 인입 급수공사, 설계변경(건축 2차, 전기 1차),

운영관리 방안 최종검토 보고,

명칭 변경 추진계획 수립 ‣ 제안접수, 주민선호도 조사

○ 2021. 9월 : 전기 사용전검사․인입, 도시가스 공급계약 체결, 설계변경(건축 3차),

공사 준공, 장애물없는 생활환경(BF) 현장심사․심의,

명칭 변경 확정(대청행복탕)

○ 2021.10월 : 장애물없는 생활환경(BF) 시정사항 조치,

명예감독관 준공검사, 집기비품 제작․구입

○ 2021.11월 : 건축물대장 생성 및 건물소유권보존등기, 감정평가

○ 2021.12월 : 전자제품 및 CCTV 구입․설치, 건물 내․외 사인물 제작․설치,

장애물편의용품(시설) 및 일반물품 구입․설치,

옥상휀스 및 통제 출입문 제작․설치,

장애물없는 생활환경(BF) 본인증서 교부․용역 준공,

｢부산광역시 중구 구립목욕시설 운영 및 관리 조례｣ 제정․공포

사용수익허가대상자 선정 입찰계획 수립 및 1차 입찰공고

□ 향후계획

○ 2022. 1월~4월 : 전자입찰 진행 및 낙찰자 선정, 사용수익허가계약 체결,

대청행복탕 운영 준비 및 개장

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재
총사업비	2,810백만원	3,500백만원
사업규모	지하1층/지상5층, 대지면적 299.6㎡, 연면적 762.66㎡	지하1층/지상3층, 대지면적 299.6㎡, 연면적 599.06㎡
사업기간	2019년 3월 ～ 2019년 12월	2019년 3월 ～ 2021년 12월
조성방안	기존건축물 리모델링	신축공사

사업명

광복로 일원 특화거리 정비

담당자

건설과 김동현(☎ 600-4732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2008년 ｢광복로 일원 시범가로 조성사업｣ 준공 이후 매년 파손구간을 부분적으로 정비하고 있는 실정으로 안전사고예방 및 주민불편사항 해소를 위하여 광복로 일원의 전반적인 도로 재정비 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 5. ~ 2022. 7.

○ 위 치 : 광복로 일원(남포역7번출구 ~ SC제일은행)

○ 규 모 : 도로정비 L= 740m, B= 3.6~6.2m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,020백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,020	19	299	1,702	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,020	19	299	1,702	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2020.  5.: 사업계획 수립 및 방침 결정

○ 2020. 5.~9.: 실시설계용역 완료

○ 2020.  7.: 주민의견 수렴을 위한 설명회 개최

○ 2021. 1.~10.: 부산市 특별교부금(2,000백만원) 확보

○ 2021. 12.: 공사착공

○ 2022.  6.: 1차 기성검사(910백만원)

□ 향후계획

○ 2022. 7.: 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간: (당 초) 2020.5. ~ 2021. 11.  (변경) 2020. 5. ~ 2022. 7.

○ 총사업비: (당 초) 2,000백만원         (변경) 2,020백만원

사업명

동광길 도로(소로2-4호선) 확장

담당자

건설과 이은미(☎600-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 차량 교행이 불가한 동광길(인쇄골목)을 확장하여 주민 통행 불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 12. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 대창동1가 54-24번지 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=310m, B= 5~8 → 8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,750	100	2,300	350
지 방 채
민간자본
기 타	400		400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 12. ~ 2018. 11. : 실시설계용역 추진

○ 2020. 2. : 도시계획시설사업 실시계획고시, 손실보상계획 공고

○ 2020. 5. ~ 12. : 토지 및 지장물 보상

○ 2021. 3. : 공사 착공

○ 2021.12. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업 : 해당사항 없음.

10-3. 민간투자사업 : 해당사항 없음.