109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 중구에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후
부평깡통시장 6차 아케이드 설치	2,000	0	0	2,000	0	2024년	2022년	0

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘22년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

부평깡통시장

6차 아케이드 설치

담당자

일자리경제과 김기원(☎600-4512)

□ 사업 목적 및 필요성

○ 비가림시설 설치로 상인 및 고객 편의 제공을 통한 전통시장 경쟁력 강화 및 상권 활성화

□ 사업개요

○ 구    간 : 중구로39번길 42 일원 (부영식육점 ~ 깡통 견과･약초)

○ 규    모 : L=113m, B=8m

○ 기    간 : 2023. 1월 ~ 2024. 2월

○ 내    용 : 아케이드 설치(건축, 전기, 소방, 정보통신) 및 도로 포장 등

○ 사 업 비 : 2,000백만원 (시비 1,500, 구비 300, 자부담 200)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	0	0	0	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

○ 2021. 12월 : 2022년도 전통시장 시설현대화사업 선정(市)

○ 2022.  2월 : 시비보조금(15억원) 교부

○ 2022.  6월 : 제1회 추가경정예산 구비(3억원) 확보

○ 2022.  6월 ~ 현재 : 상인회 자부담(93%, 186백만원) 확보

○ 2022. 12월 : 임시위원회 구성(상인회, 건축주 등) 및 사업방향 논의

○ 2023.  1월 : 사업 추진계획 수립

○ 2023.  2월 : 실시 설계용역(건축, 전기, 소방, 정보통신) 발주

○ 2023.  3월 : 실시 설계용역(건축, 전기, 소방, 정보통신) 착수           ‣ 착수 보고 및 주민설명회 개최

○ 2023.  5월 : 제1차 추진위원회 및 특허물품 선정 자문위원회 개최

□ 향후계획

○ 2023. 3월 ~ 8월 : 실시 설계용역, 건축 심의 등

○ 2023. 9월 : 공사 착공  ※ 시공감사 : 공정률 25% 시

○ 2024. 2월 : 공사 준공

10-2. 지방채 발행사업 : 해당사항 없음.

10-3. 민간투자사업 : 해당사항 없음.