□ 주요 투자사업 추진현황

우리 중구에서 ‘23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 1 투자심사 대상사업

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
광복로 분수광장 (만남의 광장) 조성	2,100	470	470	1,630	-	2024	2023	30%
부평깡통시장 6차 아케이드 설치	2,000	0	0	231	1,769	2024	2022	85%
중구다누리복지회관조성	2,900	0	2,848	0	-	2023	2021	100%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2023년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘23년말 기준으로 작성

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨 가능)

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는경우 ‘23년말 기준으로 작성

※ 담당자 연락처, 필요성, 사업개요, 총사업비(재원별), 추진상황, 향후계획, 사업변경 내역 등 순서에 따라 필히 기재

※ 대상사업 중 “의뢰심사”(광역은 중앙, 기초는 중앙 및 시도 의뢰)사업은 의무공시, “자체심사”사업은 사업규모(금액)이 크거나 중요한 사업 등에 대해 자율적으로 대상사업을 선정 공시(최소 10건 이상)

사업명

광복로 분수광장(만남의 광장) 조성

담당자

건설과 이지훈(☎600-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광복로 입구에 분수광장을 조성하여 볼거리와 즐길거리 제공으로 관광명소 부각 및 인구유입 등 도시활력 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2024.

○ 위 치 : 동광동 19-2 일원

○ 규 모 : 분수광장 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,100	470	470	1,630	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	600	134	134	466	0
시군구비	1,500	336	336	1,164	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2022. 5 ~ 8. :「지방소멸대응기금 투자사업」공모사업 신청 및 선정

○ 2023. 4. : 2023년도 제1차 지방재정투자사업 자체심사 완료

○ 2023. 7. : 제안 입찰공고

○ 2023. 8. : 평가위원 모집 및 제안서 접수, 평가위원회 개최

○ 2023. 9. : 우선협상대상자 선정 및 협상 진행(2회), 계약체결

○ 2023.10. : 사업착수 및 착수보고회 개최

○ 2024. 2. : 지하매설물 확인굴착

○ 2024. 1월~ 5월 :실시설계 관련 추진사항 점검회의(10회)

○ 2024. 4. : 중간보고회 개최

○ 2024. 6. : 중간보고회(2차) 개최

□ 향후계획

○ 2024. 7. : 최종보고회 개최

○ 2024. 8 ~ 10. : 시설물 현장설치 및 시운전

○ 2024.10. : 사업 완료

사업명

부평깡통시장 6차 아케이드 설치

담당자

일자리경제과 이용호(☎600-4512)

□ 사업 목적 및 필요성

○ 비가림시설 설치로 상인 및 고객 편의 제공을 통한 전통시장 경쟁력 강화
및 상권 활성화

□ 사업개요

○ 구    간 : 중구로39번길 42 일원

○ 규    모 : L=113m, B=8m

○ 기    간 : 2023. 1월 ~ 2024. 2월

○ 내    용 : 아케이드 설치(건축, 전기, 소방, 정보통신) 및 도로 포장 등

○ 사 업 비 : 2,000백만원 (시비 1,500, 구비 300, 자부담 200)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	127	1,373
시군구비	0	0	0	27	273
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	77	123
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

○ 2021. 12월 : 2022년도 전통시장 시설현대화사업 선정(市)

○ 2022.  2월 : 시비보조금(15억원) 교부

○ 2022.  6월 : 제1회 추가경정예산 구비(3억원) 확보

○ 2022.  6월 ~ 현재 : 상인회 자부담(93%, 186백만원) 확보

○ 2022. 12월 : 임시위원회 구성(상인회, 건축주 등) 및 사업방향 논의

○ 2023.  1월 : 사업 추진계획 수립

○ 2023.  2월 : 실시 설계용역(건축, 전기, 소방, 정보통신) 발주

○ 2023.  3월 : 실시 설계용역(건축, 전기, 소방, 정보통신) 착수           ‣ 착수 보고 및 주민설명회 개최

○ 2023.  5월 : 제1차 추진위원회 및 특허물품 선정 자문위원회 개최

○ 2023. 07월 : 소방 협의, 건축 심의

○ 2023. 08월 : 실시 설계용역 완료, 계약 심의

○ 2023. 09월 : 계약 심사, 공용건축물(가설건축물) 협의

○ 2023. 10월 ~ 11월 : 공사(감리용역) 착공

○ 2024. 04월 ~ 06월 : 전기, 정보통신, 소방 공사 (감리용역) 준공

□ 향후계획

○ 2024. 07월 : 건축공사 (감리용역 등) 준공

사업명

중구다누리복지회관 조성

담당자

생활보장과 박애경(☎600-4332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민이 함께하는 중구형 복합 복지케어 거점시설 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2023.

○ 위 치 : 중구 대청동4가 31-10 외 1필지

○ 규 모 : 지상4층(부지 325.2㎡, 연면적 595.07㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,848백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,848	0	2,848	0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,098	0	1,098	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	1,750	0	1,750	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022.   4월 : 2022년 지방소멸대응기금 신청

○ 2022.   8월 : 2022년 지방소멸대응기금 확보

○ 2022.  12월 : 2022년 특별교부세 및 2023년 본예산 확보

특별교부세 및 지방소멸대응기금 이월

○ 2023.   1월 : 조성 세부 추진계획 수립 및 건물(부지) 협의매수 계약

○ 2023. 2~4월 : 실시설계 용역 계약심사, 용역 계약 및 시행

○ 2023. 5~6월 : 공사 계약심사, 입찰 및 계약, 착공

○ 2023. 7~9월 : 선금 지급, 관급자재 구입 등

○ 2023.  10월 : 공사 준공

○ 2023.  11월 : 준공식 개최

: 해당사항 없음

□ - 2 지방채 발행사업

: 해당사항 없음

□ - 3 민간투자사업