□ 주요 투자사업 추진현황

우리 중구에서 ‘24년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 1 투자심사 대상사업

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후
부평깡통시장 6차 아케이드 설치	2,000	231	1,769	0	0	2024	2022	100
중구 노인회관 신축	10,000	846	484	5,670	3,000	2026	2023	30
자갈치시장 주변도로 확장공사	3,600	100	45	0	3,455	2027	2023	10
광복로 겨울빛 트리축제	887	0	548	339	0	2024	2023	100
부산자갈치축제	310	0	310	0	0	2024	2023	100
광복로 분수광장 (만남의 광장) 조성	3,100	0	1,986	1,000	0	2025	2024	50
부평동 주민센터 건립	7,297	114	197	6,986	0	2026	2024	30

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2024년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘24년말 기준으로 작성

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

부평깡통시장 6차 아케이드 설치

담당자

일자리경제과 이용호(☎600-4512)

□ 사업 목적 및 필요성

○ 비가림시설 설치로 상인 및 고객 편의 제공을 통한 전통시장 경쟁력 강화
및 상권 활성화

□ 사업개요

○ 구    간 : 중구로39번길 42 일원

○ 규    모 : L=113m, B=8m

○ 기    간 : 2023. 1월 ~ 2024. 8월

○ 내    용 : 아케이드 설치(건축, 전기, 소방, 정보통신) 및 도로 포장 등

○ 사 업 비 : 2,000백만원 (시비 1,500, 구비 300, 자부담 200)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,000	231	1,769	-	-
국 비	0	0	0	-	-
시 도 비	1,500	127	1,373	-	-
시군구비	300	27	273	-	-
지 방 채	0	0	0	-	-
민간자본	200	77	123	-	-
기 타	0	0	0	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 12월 : 2022년도 전통시장 시설현대화사업 선정(市)

○ 2022.  2월 : 시비보조금(15억원) 교부

○ 2022.  6월 : 제1회 추가경정예산 구비(3억원) 확보

○ 2022.  6월 ~ 현재 : 상인회 자부담(93%, 186백만원) 확보

○ 2022. 12월 : 임시위원회 구성(상인회, 건축주 등) 및 사업방향 논의

○ 2023.  1월 : 사업 추진계획 수립

○ 2023.  2월 : 실시 설계용역(건축, 전기, 소방, 정보통신) 발주

○ 2023.  3월 : 실시 설계용역(건축, 전기, 소방, 정보통신) 착수           ‣ 착수 보고 및 주민설명회 개최

○ 2023.  5월 : 제1차 추진위원회 및 특허물품 선정 자문위원회 개최

○ 2023. 07월 : 소방 협의, 건축 심의

○ 2023. 08월 : 실시 설계용역 완료, 계약 심의

○ 2023. 09월 : 계약 심사, 공용건축물(가설건축물) 협의

○ 2023. 10월 ~ 11월 : 공사(감리용역) 착공

○ 2024. 04월 ~ 06월 : 전기, 정보통신, 소방 공사 (감리용역) 준공

○ 2024. 08월 : 건축공사 (감리용역 등) 준공

사업명

중구 노인회관 신축

담당자

가족행복과 이진우(☎600-4324)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1971년도에 건립된 현 노인회관 건물은 노후화가 심각하고 공간 협소

○ 노인복지 수요 증가에 따른 안전하고 쾌적한 노인회관 재건축 시급

○ 적극적인 노인 사회참여 지원을 통한 세대통합 고령친화 정주환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 :  2022. 7. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 중구 대청동2가 1-2번지 외 1필지(현 노인회관 및 인근 부지)

○ 규 모 : 대지면적 612.3㎡, 연면적 1,846㎡, 6개층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,000	846	484	5,670	3,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,000	-	-	-	3,000
시군구비	5,200	846	484	3,870	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,800	-	-	1,800	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2022. 8. : 중구 노인회관 신축 기본계획 수립

○ 2023. 2. : 인근부지 매입(토지 278.7㎡, 건물 159.46㎡, 710백만원)

○ 2023.11. : 설계공모운영위원회 구성(市 추천)

○ 2024. 3. : 기존건축물 생활폐기물 처리, 노인회관 등 해체공사 실시

○ 2024. 9. : 기본 및 실시설계 용역 계약, 착수보고회 개최

□ 향후계획

○ 2025. 3. : 중간설계 보고회

○ 2025. 9. : 설계용역 완료, 각종 건축물 인증(BF, 제로에너지 등)

○ 2025.10. : 시공사 선정(입찰 및 계약)

○ 2026.12. : 준공 및 개관

사업명

자갈치시장 주변도로 확장공사

담당자

건설과 엄인언(☎600-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 「자갈치 수산명소화 사업」 과 연계하여 자갈치해안로 일원 도시계획도로        일부 미개설 구간의 도로 확장을 통하여, 관광객 및 지역주민의 교통편의       및 청결한 도시환경을 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ～ 2026년

○ 위 치 : 부산광역시 중구 자갈치해안로 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=323m, B=10m→20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,600	100	45	0	3,455
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,200	100	0	0	1,100
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	2,400	0	45	0	2,355

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018. 12. : 도로 확장공사 실시설계용역 완료

○ 2020. 4. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시

○ 2024. 10. : 실시설계(보완)용역 착수

○ 2025. 2. : 실시설계(보완)용역 완료

○ 2025. 4. ~ 6. : 자갈치아지매시장은 당초 6월 말 개장이였으나 상인회가                       점포 추첨에 불참, 입점 절차가 지연되고 있음.

※ 市에서는 올해 말 입점 추첨을 마무리하고 26년 설 연휴 전에 개장하는 것을        목표로 하고 있어 「자갈치시장 주변도로 확장공사」 또한 2026년 착공이 예상됨.

□ 향후계획

○ 2026. ~ 2027. : 공사 착공 및 준공

사업명

광복로 겨울빛 트리축제

담당자

문화관광과 장지영(☎600-4085)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중구의 역사, 문화 등 특성을 살린 빛 조형물과 최신 미디어 기술을 접목한       특화된 빛 축제 추진으로 지역 관광문화 발전 및 관광 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024.11.15.(금) ~ 2025.2.2.(일) [80일간] ※ 점등시간:18시~22시     ○ 위 치 : 광복로 및 광복중앙로 일원

○ 규 모 : 약1,140m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 887백만원(특교금 300, 구비 587)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	887	-	548	339
국 비
시 도 비	300	-	300	-
시군구비	587	-	248	339	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2024. 7~8월 : 축제 추진계획 수립 및 입찰 공고

○ 2024.   9월 : 협상 추진 및 계약 체결

○ 2024.  10월 : 용역 착수 및 시설물 설치

○ 2024.  11월 : 축제 세부계획 수립 및 점등 운영

○ 2025. 2~3월 : 빛 시설물 철거 및 축제 추진결과 보고

□ 향후계획

○ 축제평가 전문기관 평가보고서 분석 결과 등 개선사항 반영

▻ 타지역 관광객 유입을 위한 홍보방안, 편의시설 확충 및 축제기간 점등시간         연장 등 2025년 축제 추진 시 반영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

사업명

부산자갈치축제

담당자

문화관광과 길나혜(☎600-4081)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리나라 대표 수산물축제의 전통과 명성을 잇는 전통시장 브랜드를 활용한       관광·지역경제 활성화 도모 및 지역 홍보

□ 사업개요

○ 기    간 : 2024. 10. 3. ~ 10. 6.

○ 장    소 : 부산광역시 중구 남포동 자갈치시장 일원

○ 주요행사 :  개막식, 용신제, 대학가요제, 수산물 체험·참여행사 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 310백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	310	-	310	340	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	160	-	160	160	-
시군구비	120	-	120	150	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	30(자부담)	-	30	30	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2024. 7월 : 제31회 부산자갈치축제 지원 보조사업자 선정 및 보조금 교부(1차)

○ 2024. 8월 : 보조금 교부(2차)

○ 2024. 9월 : 제31회 자갈치축제 지원 계획 수립 및 유관기관 협조 요청

○ 2024. 10월 : 보조금 교부(3차), 제31회 자갈치축제 개최 지원 및 결과보고

○ 2025. 2월 : 제31회 부산자갈치축제 보조금 정산결과 보고

□ 향후계획

○ 2025년 축제 추진 시 제31회 부산자갈치축제 지원 결과보고 및 성과분석       보고서 등 개선사항 반영토록 지원

▻ 안전관리요원 추가 배치, 카드결제 도입 등 결제방식 보완 등

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

사업명

광복로 분수광장(만남의 광장) 조성

담당자

건설과 엄인언(☎600-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중구의 상징거리 광복로 입구 분수광장 조성을 통해 관광명소 및 보행네트워크간       거점기능을 강화하여 생활인구 유입 및 도시 활력 증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ～ 2025년

○ 위 치 : 부산광역시 중구 동광동1가 19-2 일원

○ 규 모 : 만남의 광장 조성 1식 A=758㎡ 등

* 바닥분수, 미디어파사드, 미디어폴 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,100	0	1,986	1,000	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	600	0	600	0	0
시군구비	1,500	0	386	1,000	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	1,000	0	1,000	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2023. 10. : 「광복로 분수광장(만남의 광장) 조성사업」 착수 보고회 개최

○ 2024. 6. ~ 9. : 시설물 현장설치, 시운전 및 현장테스트

○ 2024. 7. : 「광복로 분수광장(만남의 광장) 조성사업」 실시설계 완료

○ 2024. 11. : 「광복로 분수광장(만남의 광장) 조성사업」 완료

○ 2025. 3. : 「광복로 입구 미디어시설 제작·설치 사업」 실시설계용역 착수

○ 2025. 5. : 「광복로 입구 미디어시설 제작·설치 사업」 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2025. 8. : 미디어시설 제작·설치 및 콘텐츠 제작 착수

○ 2025. 11. : 미디어시설 제작·설치 및 콘텐츠 제작 완료

사업명

부평동 주민센터 건립

담당자

총무과 황정숙(☎600-4112)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재 상가지역에 있는 주민센터를 주거지역 내로 이전 건립하여 부평동

지역의 균형발전 도모와 접근성을 향상으로  주민친화형 주민센터 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 5월 ～ 2026년 12월

○ 위 치 : 부산광역시 중구 부평동3가 62-2번지 외 4필지

○ 규 모 : 지상 4층(연면적 1,495㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,297백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	7,297	114	197	6,986	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	4,197	114	197	3,886	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	3,100	0	0	3,100	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2023. 5. : 부평동 주민센터 건립계획 재수립

○ 2023. 9. : 부평동 주민센터 건립계획 변경 수립

○ 2024. 2. : 설계공모 운영위원회 구성 및 운영

○ 2024. 6. ~ 8. : 설계공모 추진(접수 및 심사 후 당선작 선정)

○ 2024. 10. : 설계용역 착수보고회 및 주민설명회 개최

○ 2025. 3. : 중간설계보고회의

○ 2025. 6. : 제로에너지건축물 예비인증 완료, 공용건축물 건축협의 요청

□ 향후계획

○ 2025. 7. : 설계심의 및 공사기간 산정 적정성 심의 진행(부산시)

○ 2025. 8. : 설계용역 완료 및 계약 심사

○ 2025. 9. : 공사 입찰 및 계약 추진

○ 2025. 10. ~ 2026. 12. : 공사 착공 및 준공

: 해당사항 없음

□ - 2 지방채 발행사업

: 해당사항 없음

□ - 3 민간투자사업